109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 수성구에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
고모마을~명복공원간 도로건설	7,800	104	678	618	6,400	2023	2017	11.4
상동공영주차장 조성	3,010	-	2,996	-	-	2019	2018	100
두산동 수성못 동편 도로건설	4,785	3,882	903	-	-	2019	2015	100
만촌3동 수성대학교 서편 도로건설	4,464	4,464	-	-	-	2020	2016	90
수성못 동편 한전 지중화사업	1,350	1,264	86	-	-	2019	2016	100
들안길 한전지중화사업	5,200	-	4,256	944	-	2020	2017	75
금호강 사색있는 산책로 조성사업	7,500	-	20	3,310	4,170	2021	2019	20
수성구 육아종합지원센터 설치	4,578	800	16	1,309	2,453	2021	2019	17.8
국공립어린이집 확충 (고산어린이집 대체신축)	5,099	800	-	860	3,439	2021	2019	15.6
수성명품 단독주택지 조성사업	4,280	2,143	902	1.235	-	2020	2013	71
들안길 프롬나드 행복마을 조성	6,238	2,669	536	3,033	-	2020	2015	52
수성빛예술제	570	0	570	800	800	연례반복	2019	연례반복
수성못페스티벌 개최	305	0	305	365	365	연례반복	2019	연례반복
수성못 야외무대 상설공연	790	330	130	110	220	연례반복	2019	연례반복
범어2동 행정복지센터 이전	3,367	2,519	848	-	-	2019	2016	100
범어3동 행정복지센터 신축	8,708	6,763	1,945	-	-	2019	2016	100
범어4동 행정복지센터 신축	7,257	-	2,449	220	4,588	2022	2018	34
황금2동 복합청사 신축	10,159	2,829	4	7,326	-	2021	2017	32
파동 행정복지센터 신축	11,282	-	650	1,732	8,900	2022	2019	6
두산동 행정복지센터 신축	9,897	-	2,620	7,277	-	2021	2019	26
두산대권 종합사회복지관 건립	9,285	16	13	160	9,096	2021	2016, 2019	57
황금종합 사회복지관 리뉴얼	2,203	66	2,137	-	-	2019	2018	100
신매시장 주차환경개선사업	16,200	-	-	1,208	14,992	2023	2019	10
진밭골 생활체육시설 조성	5,450	54	99	829	4,468	2021	2017	60
수성패밀리파크 남측 체육시설 조성	2,148	42	1,604	502	-	2020	2018	80
제2구민운동장 건립	19,450	304	100	150	18,896	2022	2017	50
두산레포츠센터 조성	5,600	36	1,734	3,830	-	2021	2018	10
청소년 문화의 집 건립	5,500	11	488	5,001	-	2021	2017	43
고산서원 복원 정비 사업	696	640	16	41	-	2020	2016	90

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

고모마을 명복공원간 도로건설

담당자

공원녹지과 김문수(☎666-2832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변에 농지가 많아 영농기계 통행은 많으나 노폭(B=2~4m)이 협소하여 차량교행이 어려움에 따라 주민들의 통행불편 해소 및 안전사고 예방하고 지역주민 숙원사업으로 민원해소 및 지역개발 촉진하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2023년

○ 위 치 : 고모동 562번지 일원(고모마을~명복공원)

○ 규 모 : 도로건설 및 확장 B=8m, L=1,518m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,800	104	678	618	6,400
국비	6,320	94	610	496	5,120
구비	1,480	10	68	122	1,280

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 11.4%)

○ ‘17.1 ~ 19.9 : 지반조사, 도시관리계획심의, 실시설계용역 및 지적측량 완료

○ ‘20.2 : 실시설계 고시 및 보상협의

□ 향후계획

○ ‘20.3 ~ ’23.12 : 보상완료 및 공사 시행

□ 사업변경 내역

○ 기간 : 당초(2017.1~2022.12), 변경(2017.1~2023.12)

○ 총사업비 증액 : 65억 → 78억 (보상비 증가)

사업명

상동공영주차장 조성사업

담당자

교통과 김근후(☎666-3043)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상동 일대 주택가 주차난 해소와 두산대권 종합사회복지관 건립 및 들안길       프롬나드 행복마을 조성사업에 따른 주차수요 충족을 위해 공영주차장을       조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019년

○ 위 치 : 상동 44-5, 44-6

○ 규 모 : 자주식 노외주차장 A=993.6㎡, 주차면수 31면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,010백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
구비	2,996	-	2,996	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 상동 공영주차장 조성사업 계획 수립 : 2017. 7월

○ 부지 감정평가 의뢰 : 2019. 3. 27.

○ 부지매입 검토를 위한 전문가 자문회의 개최 : 2019. 4. 16.

○ 부지매입 및 등기이전 완료 : 2019. 9. 17.

○ 상동 공영주차장 조성 실시설계용역 : 2019. 10. 9.

○ 상동 공영주차장 조성 공사 시행 : 2019. 11. 18.

○ 준  공 : 2019. 12월말

사업명

두산동 수성못 동편 도로건설

담당자

건설과 김종면(☎666-2883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성호텔 증축 및 수성못 관광 활성화에 따른 이용객 및 교통량 증가

예측되어 도로개설을 통한 교통문제 해결 및 관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 9월 ~ 2019. 10월

○ 위 치 : 수성호텔 ~ 불교한방병원

○ 규 모 : 도로건설 B=15→20m, L=280m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,785백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
민간자본	4,785	3,882	903	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015.  8월 : 협약체결(구청 ↔ ㈜호텔수성)

○ 2018.  1월 : 공사 착공

○ 2019. 11월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증가 : 당초 2,050백만원 → 변경 4,785백만원

- 보상금 증가에 따른 총사업비 증가

사업명

만촌3동 수성대학교 서편 도로건설

담당자

건설과 김동문(☎666-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 만촌3동 수성대학교 및 오성중·고등학교 주변 도로개설을 통한 지역주민들의 교통불편 해소와 환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2020. 7월

○ 위 치 : 만촌동 산377-1번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=6~7m, L=310m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,464백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	4,464	4,464	-	-	-
구비	2,690	2,690	-	-	-
민간자본	1,774	1,774	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2016.  4월 : 협약서 체결(수성구청, 주식회사 삼정이앤시)

○ 2016.  6월 : 실시설계 시행

○ 2017.  4월 : 실시계획 인가 고시

○ 2017.  5월 : 보상열람공고 및 협의

○ 2017. 11월 : 공사착공

○ 2017. 12월 : 공사중지(보상지연)

○ 2018.  5월 : 실시계획변경 인가 고시

○ 2018.  6월 : 수용재결

○ 2018.  8월 : 공사중지 해제

○ 2019.  6월 : 실시계획변경 인가 신청

○ 2020.  6월 : 현장점검 지적사항 조치

□ 향후계획

○ 2020.  7월 : 공사준공

사업명

수성못 한전 지중화사업

담당자

건설과 이수경(☎666-2881)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한전 지중화사업을 통한 수성못 관광 활성화 및 도시미관 개선

□ 사업개요

○ 기 간 :  2017. 1월 ~ 2019 .4월

○ 위 치 : 두산오거리 ~ 수성호텔네거리

○ 규 모 : 한전지중화 32본 L=520m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
구비	1,350	1,264	86	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016.  8월 : 한전지중화 방침 결정

○ 2016.  8월 : 2017년 한전지중화 대상사업지 신청(수성구↔한전)

○ 2017.  2월 : 협약체결(수성구↔한전)

○ 2017.  6월 : 시설부담금 납부(한전, 통신사)

○ 2017. 12월 : 교통소통대책 수립 및 심의(한전)

○ 2018.  3월 : 공사착공

○ 2018. 11월 : 공사중지(공원녹지과 공사구간 변경에 따른 사업지연)

○ 2019.  3월 : 공사중지 해제

○ 2019.  4월 : 공사준공

사업명

들안길 한전지중화 사업

담당자

건설과 공용준(☎666-2885)

□ 사업목적 및 필요성

○ 들안길 프롬나드사업 도로공사 시 한전 지중화를 통한 도시미관 향상 및       보행환경개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1월 ~ 2020. 9월

○ 위 치 : 상화네거리(상동지구대)~들안길삼거리

○ 규 모 : 한전지중화 L=620m(양쪽)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,200	-	4,256	944	-
구비	2,600	-	1,656	944	-
기타	2,600	-	2,600	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2017.  4월 : 2017년 한전지중화 대상사업지 선정(한전 → 수성구)

○ 2017.  8월 : 들안길 한전지중화사업 추진계획 수립

○ 2018.  1월 : 이행협약서(수성구 ↔ 한전) 체결

○ 2019.  6월 : 한전 지중화 설계완료

○ 2019.  7월 : 이행협약서(수성구 ↔ KT 및 통신사업자) 체결

○ 2019.  8월 : KT 및 통신사업자 지중화 설계완료

○ 2019. 12월 : 공사 착공(들안길 프롬나드 행복마을 조성사업과 병행 추진)

□ 향후계획

○ 2020. 9월 : 공사 준공

사업명

금호강 사색있는 산책로 조성사업

담당자

건설과 김정근(☎666-2993)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금호강 좌안 일부구간의 보행로 단절(둑마루(B=4∼5m) 자동차, 자전거, 보행자 겸용 도로로 이용)로 보행자 안전사고 위험 및 통행불편에 따른 민원 증가

○ 산책로 조성으로 보행 안전을 확보하고 주민에게 여유와 낭만을 만끽할 수 있는 새로운 휴식 공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10월 ∼ 2021. 12월

○ 위 치 : 금호강 좌안 팔현마을(고모동 690번지선) ∼ 남천합류부(매호동 143-6)

○ 규 모 : 산책로 조성 L=4.7km, B=2.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
구비	7,500	-	20	3,310	4,170

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2018. 10월 : 기본구상 및 타당성조사 용역 착수

○ 2019.  4월 : 기본구상 및 타당성조사 용역 완료

○ 2019.  8월 : 지방재정투자사업 심사 완료

○ 2019. 12월 : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2020.  3월 : 소규모 환경영향평가 용역 착수

○ 2020.  6월 : 유관기관(부산지방국토관리청, 대구지방환경청 등) 협의

○ 2020.  7월 : 행정절차(하천점용허가 등) 이행, 실시설계 및 소규모 환경영향평가 용역 완료

○ 2020.  8월 : 공사 착수

○ 2021. 12월 : 공사 완료

사업명

수성구 육아종합지원센터 설치

담당자

청년여성가족과 엄재목(☎666-2611)

□ 사업목적 및 필요성

○ 육아지원을 위한 거점기관으로서 어린이집 지원과 관리 및 교직원 상담

○ 가정양육 보호자에게 맞춤형 서비스 지원을 통한 아이키우기 좋은 보육환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 2월 ~ 2021. 11월

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 시지동 462-31(現 고산어린이집 부지)

○ 규 모 : 연면적 1167㎡, 지상2층 일부～5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,578백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,578	800	16	1,309	2,453
국비	1,000	-	-	1,000	-
시비	500	-	-	-	500
구비	3,078	800	16	309	1,953

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17.8%)

○ 신축계획 수립 : 2019. 2. 22.

<공공건축물 도시유일성 확보 관련 사업 순연>

○ 설계공모 및 심사 : 2019. 10 ~ 2019. 12

○ 실시설계 : 2019. 12 ~ 2020. 6

□ 향후계획

○ BF예비인증, 일상감사 및 계약감사 : 2020. 7~8월

○ 공사 : 2020. 10. ~ 2021. 10.

○ 개소 : 2021. 11.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 44억 → 46억

○ 연면적 : 926㎡ → 1167㎡

○ 사업기간 : 2019. 2. ~ 2021. 2. → 2019.2. ~ 2021.11.

사업명

국공립어린이집 확충

(고산어린이집 대체신축)

담당자

청년여성가족과 엄재목(☎666-2611)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후한 국공립 어린이집인 고산어린이집의 대체신축으로 수준 높은

보육서비스 제공 및 안전하고 쾌적한 보육한경 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 2월 ~ 2021. 11월

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 시지동 462-31

○ 규 모 : 연면적 898㎡, 지하1층, 지상1층～지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,099백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,099	800	-	860	3,439
국비	461	-	-	461	-
시비	230	-	-	230	-
구비	4,408	800	-	169	3,439

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17.8%)

○ 신축계획 수립 : 2019. 2. 22.

<공공건축물 도시유일성 확보 관련 사업 순연>

○ 설계공모 및 심사 : 2019. 10 ~ 2019. 12

○ 실시설계 : 2019. 12 ~ 2020. 6

□ 향후계획

○ BF예비인증, 일상감사 및 계약감사 : 2020. 7~8월

○ 공사 : 2020. 10. ~ 2021. 10.

○ 개소 : 2021. 11.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 53억 → 51억

○ 연면적 : 1187㎡ → 898㎡

○ 사업기간 : 2019. 2. ~ 2021. 2. → 2019.2. ~ 2021.11.

사업명

수성명품 단독주택지 조성사업

담당자

도시디자인과 안경임(☎666-3272)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 저층주택지에 주차·방범·소공원 등 편의시설이 잘 갖춰진

공동주택의 장점을 접목하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2020년

○ 위 치 : 범어2동(3개소), 만촌2동(1개소)

○ 규 모 : 수성구 국채보상로186길 45 외 412필지

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,280	2,143	902	1.235	-
국비	2,140	1,071	451	617.5	-
시비	1,070	536	225.5	308.75	-
구비	1,070	536	225.5	308.75	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 71%)

○ 2015. 2. ~ 12. : 1차 사업구역 기본 및 실시설계용역

○ 2016. 3. ~ 2017. 12. : 1차 사업구역 사업시행

○ 2018. 6. : 만촌2동 주민커뮤니티센터 준공

○ 2019. 5. : 범어2동 주민커뮤니티센터 실시설계 착수

○ 2019. 10. : 무열어린이공원 보수

○ 2019. 10. : 마을공용주차장 조성 완료

□ 향후계획

○ 2020. 1 : 범어2동  주민커뮤니티센터 착공

○ 2020. 12. : 범어2동 주민커뮤니티센터 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : 2015년 ~ 2019년(당초) ⇒ 2015년 ~ 2020년(변경)

사업명

들안길 프롬나드 행복마을 조성사업

담당자

도시디자인과 공현태(☎666-3271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성유원지의 다양한 개발사업과 연계하여 들안로에 걷고싶은 산책로를

조성, 들안로 상권 활성화 및 지역 명소화 추진

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016 ~ 2020(5년)

○ 위    치 : 상화네거리(상동지구대) ~ 들안길삼거리 좌우 400m 구간

○ 사업내용 :

- 차선 축소․인도폭 조정을 통한 보행중심의 프롬나드 조성

- 상동․두산동 주거환경개선사업(공영주차장 및 커뮤니티센터 조성 등)

- 주민역량강화사업, 들안길 상권활성화 및 지역창의문화플랫폼 조성사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,238백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,238	2,669	536	3,033	-
국비	3,049	1,489	364	1,196	-
시비	1,525	745	81	699	-
구비	1,664	435	91	1,138	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 52%)

○ 기본 및 실시설계 용역 착수                : 2016.  5. 4.

※ 기본 및 실시설계 용역 중지(2016. 11. 3.)

○ 주거환경개선사업 시행                     : 2017. 6. ~ 12.

○ 대구시 협의 및 사업계획 변경 승인(국토부)  : 2018. 12.

○ 최종 주민설명회 및 보고회 개최            : 2019. 5. ~ 6.

○ 기본 및 실시설계, 일상감사, 계약심사 완료  : 2019. 9. ~ 10.

○ 프롬나드 조성공사 착공                    : 2019. 12.

□ 향후계획

○ 2020. 하반기 : 프롬나드 조성공사 준공

○ 2020. 하반기 : 공영주차장 조성공사 착공 및 준공

사업명

수성빛예술제

담당자

문화예술과 하지현(☎666-2162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 겨울철 관광 비수기에 조명을 이용한 볼거리 제공 및 참여형 빛콘텐츠를       활용한 즐길거리 제공을 통해 관광객 유치로 지역활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 12. 20. ~ 2020. 1. 12.

○ 위 치 : 수성못 일원

○ 규 모 : 5,000여명의 주민 참여, 6,000여 작품 전시 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,187백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
구비	2,187	-	570	800	800

□ 추진상황

○ 제1회 수성빛예술제 개최 및 평가. 피드백

○ 제2회 수성빛예술제 기본계획 수립 및 총감독 선임

□ 향후계획

○ 제2회 수성빛예술제 개최 : 2020. 12. 11. ~ 2021. 1. 3.

□ 사업변경 내역

○ 당초투자심사예산 : 537백만원 / 최종변경예산 : 570백만원

사업명

수성못페스티벌

담당자

문화예술과 이재민(☎666-2163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성못을 주제로 하는 다채로운 축제 프로그램과 생활예술인 및 지역         주민들이 함께 소통하고 공유할 수 있는 화합의 장 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. 27. ~ 9.30

○ 위 치 : 수성못 일원

○ 내 용

- 시민참여 주제공연 : 수성못을 배경으로 펼쳐지는 구민 화합의 장

- 프린지 페스티벌 : 구민 합창대회, 생활예술 경연 등

- 내가 만드는 체험부스 : 주민이 직접 체험 프로그램 제작·운영

※ 들안길 푸드페스티벌 병행개최 : 로드레스토랑, 들안길가요제 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,035백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1035	-	305	365	365
시비	45	-	45	45	45
구비	900	-	260	320	320

□ 추진상황

○ 제6회 수성못페스티벌 개최 및 평가. 피드백 : 2019. 11월

○ 대구시 지역축제 육성지원사업 우수지역축제1위선정 : 2020. 1월

○ 제7회 수성못페스티벌 기본계획 수립 : 2020. 4월

○ 축제추진위원회 개최 : 2020. 4월

□ 향후계획

○ 제7회 수성못페스티벌 개최 : 2020. 9. 18. ~ 9. 20.

□ 사업변경 내역

○ 당초투자심사예산 : 305백만원 / 최종변경예산 : 365백만원

사업명

수성못 야외무대 상설공연

담당자

문화예술과 전수미(☎666-2173)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수상못 야외무대를 활용한 다양한 장르의 문화예술 상설공연 실시로 공연산업 인프라를 조성하고 주민에게 양질의 문화향유 기회 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. 25. ~ 2019. 9. 10.

○ 위 치 : 수성못 일원

○ 규 모 : 총 24회 공연 실시

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  790백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	790	330	130	110	220
시비	590	250	100	80	160
구비	200	80	30	30	60

□ 추진상황

○ 2019 수성못 야간상설공연 추진계획 수립 : 2020. 2월

○ 공연 주관단체 공모 선정 및 사업진행 : 2020. 3 ~ 9월

- 사업진행 협의 후 공연 실시 및 평가, 피드백

○ 사업 보조금 정산 : 2020. 12월

- 총 24회 공연 실시(수상무대 상설공연 9회, 소규모 까페공연 15회)

□ 향후계획

○ 2020년 수성못 야간상설공연 실시 : 2020. 7월 ~ 10월(매주 금, 총 13회)

사업명

범어2동 행정복지센터 이전

담당자

행정지원과 류병창(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후되고 협소한 공간으로 인해 주민 이용이 불편한 행정복지센터를 이전,

다양한 행정서비스 제공으로 행복공동체 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 5월 ~ 2019. 2월

○ 위 치 : 달구벌대로 489안길 47(범어동)

○ 규 모 : 지상4층(연면적 832㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,367백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
구비	3,367	2,519	848	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 5월 : 행정복지센터 이전계획 수립

○ 2016. 10월 : 부지매입완료

○ 2016. 12월 : 설계공모

○ 2017. 3월 : 설계용역

○ 2018. 2월 : 착공

○ 2019. 2월 : 준공

○ 2019. 3월 : 신청사 이전

사업명

범어3동 행정복지센터 이전

담당자

행정지원과 류병창(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민 숙원사업인 복합청사로 신축하여 다양한 행정수요에 맞추어 서비스를 제공

○ 어르신 행복과 건강한 삶을 위한 양질의 건강관리 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 5월 ~ 2019. 2월

○ 위 치 : 상록로 42(범어동)

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 5층 / 부지면적 616.5㎡, 연면적 2,217.76㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,708백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
구비	8,708	6,763	1,945	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 7월 : 부지매입 완료

○ 2017. 2월 : 기본설계 공모 공고

○ 2017. 5월 : 설계용역 착수

○ 2018. 2월 : 착공

○ 2019. 2월 : 준공

○ 2019. 3월 : 신청사 이전

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 1차 변경 : 연면적 1,800㎡ → 2,081㎡ (지하주차장 설치 등)

○ 건축비 증가 : 47.9억원 →  53.7억원 (1차 사업규모 변경)

○ 사업규모 2차 변경 : 연면적 2,081㎡ → 2,243㎡ (5층 주민자치센터 설치 등)

사업명

범어4동 행정복지센터 이전

담당자

행정지원과 류병창(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후되고 협소한 공간으로 주민 이용이 불편한 범어4동 동 청사 이전

○ 다양한 행정서비스 제공과 함께 문화 및 공간 공유가 가능한 행정복지센터

신축으로 행복공동체의 기반을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8월 ~ 2022. 4월

○ 위 치 : 달구벌대로504길 24-3(범어동)

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층 / 부지면적 474㎡, 연면적 1,440㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,257백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
구비	7,257	-	2,449	220	4,588

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 34%)

○ 2018. 8월 : 기본계획 수립

○ 2018. 10월 : 공유재산 심의회 심의

○ 2018. 10월 : 공유재산 관리계획 의회 의결(226회 임시회)

○ 2019. 4월 : 부지매입

○ 2019. 5월 ~ 6월 : 주민협력단 구성 및 설명회 개최

○ 2020. 2월 : 공공건축자문단 활용 설계 지침서 작성 용역

○ 2020. 6월 : 설계공모

□ 향후계획

○ 2021. 4월 ~ 2022. 4월 : 공사시행

사업명

황금2동 행정복지센터 이전

담당자

행정지원과 류병창(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후되고 협소한 황금2동 행정복지센터를 주거지역이 밀집한 동 중심지역

으로 이전 및 주민 복리증진을 위한 동청사 신축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2021. 12월

○ 위 치 : 청솔로2길 64(황금동)

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 4층/ 부지면적 886.1㎡, 연면적 2,375㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,362백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,159	2,829	4	7,326	-
국비	492	-	-	246	246
시비	368	-	-	184	184
구비	9,299	2,829	4	6,282	184

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

○ 2017. 5월 : 기본계획 수립

○ 2017. 8월 : 공유재산 심의회 의결

○ 2017. 9월 : 공유재산 관리계획 의회 의결(218회 임시회)

○ 2018. 8월 : 황금2동 행정복지센터 신축계획(부지변경)

○ 2018. 8월 : 공유재산 심의회 심의

○ 2018. 9월 : 공유재산 관리계획 변경안 의회 의결

○ 2018. 12월 : 부지매입 및 등기

○ 2019. 3월 : 주민협력단 구성 및 설명회 개최

○ 2019. 12월 : 공공건축자문단 활용 설계 지침서 작성 용역

○ 2020. 1월 ~ 10월 : 설계공모 및 실시설계

□ 향후계획

○ 2020. 12월 ~ 2021. 12월 : 공사시행

사업명

파동 행정복지센터 이전

담당자

행정지원과 류병창(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후되고 협소한 공간으로 주민 이용이 불편한 파동 동 청사를 다양한 행정

서비스 제공과 함께 문화 및 공간 공유가 가능한 행정복지센터로 신축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4월 ~ 2022. 12월

○ 위 치 : 파동로22길 9-7(파동) 일원

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층(연면적 2,800㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,282백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
구비	11,282	-	650	1,732	8,900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

○ 2019. 4월 : 기본계획 수립

○ 2019. 5월 : 공유재산 심의회 심의

○ 2019. 5월 : 공유재산 관리계획 의회 의결(229회 임시회)

○ 2019. 5월 : 대구시 투자심사 승인.

○ 2019. 10월 : 부지계약

○ 2020. 3월 : 잔금 지급 및 등기

□ 향후계획

○ 2021. 상반기 : 설계공모

○ 2021. 하반기 : 공사시행

사업명

두산동 행정복지센터 이전

담당자

행정지원과 류병창(☎666-2224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민들의 숙원사업인 행정복지센터 건립으로 주민만족도를 제고하고,

동 중심지역으로 이전, 주민들이 활동이 가능한 공공청사로 신축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4월 ~ 2021. 12월

○ 위 치 : 상화로 95(두산동) 일원

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층(연면적 2,290㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,897백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
구비	9,897	-	2,260	7,277	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 26%)

○ 2019. 4월 : 기본계획 수립

○ 2019. 5월 : 공유재산 심의회 의결

○ 2019. 5월 : 공유재산 관리계획 의회 의결(229회 임시회)

○ 2019. 5월 : 대구시 투자심사 승인

○ 2019. 5월 : 부지계약

○ 2019. 9월 : 부지매입 및 등기

○ 2019. 10월 : 주민협력단 구성 및 설명회 개최

○ 2019. 12월 : 공공건축자문단 활용 설계 지침서 작성 용역

○ 2020. 1월 ~ 10월 : 설계공모 및 실시설계

□ 향후계획

○ 2020. 12월 ~ 2021. 12월 : 공사시행

사업명

두산대권 종합사회복지관 건립

담당자

복지정책과 백승찬(☎2513)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복지시설이 부족한 두산대권 지역을 대상으로 종합사회복지관 건립을

통해 생활권별 균형 있는 복지수요 충족

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2021년

○ 위 치 : 상동 44번지(상동 소공원 2,980.9㎡)

○ 규 모 : 지하1층/지상4층(연면적 : 2,810㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,285백만원(특교세 1,000 특교금 1,000 구비 7,285)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,285	16	13	160	9,096
특별교부세	1,000	-	13	-	987
특별교부금	1,000	-	-	160	840
구비	7,285	16	-	-	7,269

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 57%)

○ 2016.  8월 : 두산대권 복지관 건립 기본계획 수립

○ 2016. 10월 : 지방재정 투·융자 심사

○ 2016. 11월 : 공유재산관리계획 구의회 의결

○ 2016. 12월 : 중기지방재정계획 반영

○ 2017.  6월 : 도시계획시설변경 도시계획위원회 상정(결과 : 유보)

○ 2019.  5월 : 두산대권 복지관 건립 변경계획 수립

○ 2019.  6월 : 복지관 주민설명회 개최

○ 2019.  7월 : 도시계획시설변경 도시계획위원회 상정(결과 : 가결)

○ 2019.  9월 : 공유재산관리계획(변경사항) 구의회 의결

○ 2019. 12월 : 설계공모 기획·운영 지원 용역 착수 및 완료

○ 2020.  2월 : 두산대권 복지관 건립 변경계획 수립(지하1층 확장)

○ 2020.  3월 : 공공건축 사업계획 사전검토(건축도시공간연구소)

○ 2020.  5월 : 공공건축심의위원회 개최

○ 2020.  7월 : 설계공모 시행

□ 향후계획

○ 설계공모 심사, 계약 및 설계 착수 : 2020. 9월

○ 실시설계 완료 : 2021. 3월

○ BF예비인증, 설계VE, 일상감사 및 계약심사 : 2021. 4 ~ 7월

○ 공사 입찰공고 및 계약 : 2021. 8월

□ 사업변경 내역

구 분	당 초 (2016. 8월)	1차 변경 (2019. 5월)
사 업 비	6,411백만원 (특교세 1,000 특교금 1,000 구비 4,411)	9,285백만원 (특교세 1,000 특교금 1,000 구비 7,285)
사업기간	2016 ~ 2018년	2016 ~ 2021년
사업내용	부지면적 2,000㎡
	연면적 2,340㎡, 지상 4층	연면적 2,810㎡, 지하1층/지상4층

사업명

황금종합사회복지관 리뉴얼사업

담당자

복지정책과 백승찬(☎2513)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 황금종합사회복지관에 대한 리뉴얼 공사를 통해 이용 지역 주민

복지 증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019년

○ 위 치 : 대구광역시 수성구 청수로 45길 41(황금동)

○ 내 용

• 증   축 : 465.29㎡

- 지상 1층 : 로비, 승강기 홀(13.85㎡)

- 지상 2층 : 계단실, 승강기 홀(48.74㎡)

- 지상 3층 : 전체 증축(402.7㎡)

• 구조보강 : 지하1층, 지상1~2층 기둥 및 보 구조 보강

• 승강기 및 냉난방기 설치

• 프로그램실·사무실·상담실 등 개보수, 외벽 및 바닥 보수

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,303백만원(시비 1,013 / 특교금 1,100 / 구비 190)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,203	66	2,137	-	-
시비	1,012	45	967	-	-
특별교부금	1,100	21	1,079	-	-
구비	91	0	91	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 보조금 교부결정(1,013백만원) : 2017. 2월

○ 리뉴얼사업 추진계획 수립 : 2017. 7월

○ 건물 구조안전진단 실시 : 2017. 7 ~ 8월

○ 설계용역 착수 : 2017. 10월

○ 시 특별교부금(600백만원) 교부 : 2017. 12월

○ 설계용역 완료 : 2018. 4월

○ 시 특별교부금(500백만원) 교부 : 2018. 8월

○ 구비(100백만원) 추가경정예산 편성 : 2018. 8월

○ 건축공사 착공 : 2018. 12월

○ 실정보고에 따른 검토 및 공사 중지 : 2019. 2월

○ 설계변경 검토 및 설계변경안 마련 : 2019. 2 ~ 7월

○ 공사 중지 해제 : 2019. 6월

○ 구비(90백만원) 추가경정예산 편성 : 2019. 9월

○ 사용검사 승인 : 2020. 2. 20.

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	1차 변경 (2017.12월)	2차 변경 (2018.12월)	3차 변경 (2019.7월)	4차 변경 (2019.11월)
사 업 비	1,013 (시비 1,013)	1,613 (시비 1,013, 시 특교금 600)	2,213 (시비 1,013, 시특교금 1,100, 구비 100)	2,213 (시비 1,013, 시특교금 1,100, 구비 100)	2,303 (시비 1,013, 시특교금 1,100, 구비 190)
사업기간	‘17.3~’17.12월	‘17.3~’18.9월	‘17.3~ ’19.7월	‘17. 3~’19.12월	‘17. 3~’19.12월
사업내용	ㅇ승강기 설치 ㅇ프로그램실 외벽보수 및 증축
		ㅇ상담센터 개보수 ㅇ화장실 및 경로당 개보수 등
			ㅇ구조보강 공사
					ㅇ작업안정성을 위한 공법 변경

사업명

신매시장 주차환경개선사업

담당자

일자리경제과 이석철(☎666-4313)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차환경 개선을 통해 전통시장 이용객에게 편리한 구매환경을 제공하고 인근 주민의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 사업명 : 신매시장 지하공영주차장 조성사업

○ 기  간 : 2019년 ~ 2023년

○ 위  치 : 대구광역시 수성구 신매동 571번지

○ 규  모

- 지하2층(주차장)

- 주차면수 134면 정도

- 대지면적 3,705㎡, 연면적 5,780㎡ 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	16,200	-	-	1,208	14,992
국비	6,000	-	-	448	5,552
시비	5,100	-	-	380	4,720
구비	5,100	-	-	380	4,720

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 2019. 12월 : 사업 부지 사용 동의(시 의회)

○ 2020.  6월 : 건설사업관리용역 사업수행능력 평가 공고

□ 향후계획

○ 2020.  8월 : 건설사업관리용역 착수

○ 2020. 10월 : 설계 공모

○ 2021. ~ 2023. : 설계 및 시공(설계 6개월, 시공 20개월 소요예정)

사업명

진밭골 생활체육시설 조성

담당자

체육진흥과 김윤수(☎666-2186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수성못 상화동산 체육시설에 대한 이전요구와 생활체육시설 확충에 대한 주민의 높은 수요를 반영한 새로운 생활체육시설 설치로 주민의 건강증진과 주민 맞춤형 체육행정 구현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 8. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 범물동 919번지 등 8필지

○ 규 모 : 7,336㎡(배드민턴 4면, 테니스장 2면, 주차장 45면 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,450	54	99	829	4,468
국비	1,000	-	-	-	1,000
구비	4,450	54	99	829	3,468

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘19.  7. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시

○ ’19. 12. : 토지보상계획 열람 공고 및 감정평가 실시

□ 향후계획

○ ‘20.  7. : 실시계획 고시

○ ’20. 12. : 토지보상 완료

○ ’21. 12. : 공사 준공

사업명

수성패밀리파크 남측 생활체육시설 조성

담당자

체육진흥과 김윤수(☎666-2186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 생활체육활동 욕구 충족 및 주민요구를 반영한 다양한 체육시설 조성으로 주민의 건강증진을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. ~ 2020. 5.

○ 위 치 : 고모동 26-6번지 일원

○ 규 모 : 대지면적 5,516㎡(파크골프 9홀)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,148백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
구비	2,148	42	1,604	502	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ ‘19.  3. : 토지보상(협의매수)

○ ’19. 11. : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ ‘20. 1. : 개발제한구역 행위허가

○ ’20. 2. : 공사 착공

○ ’20. 5. : 공사 준공

사업명

제2구민운동장 건립

담당자

체육진흥과 김윤수(☎666-2186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 생활체육활동 욕구 충족 및 주민요구를 반영한 다양한 체육시설 조성으로 주민의 건강증진을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 6. ~ 2022. 6.

○ 위 치 : 매호동 203번지 등 39필지(천을산 북편)

○ 규 모 : 48,160㎡(축구장 1면, 야구장 1면, 족구장 6면, 주차장 238면 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
구비	19,450	304	100	150	18,896

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ ‘19.  5. : 개발제한구역관리계획 미반영시설 국토교통부 협의 완료

□ 향후계획

○ ’20.  1. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시

○ ‘20. 10. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

○ ‘21.  6. : 토지보상 완료

○ ‘22.  6. : 공사 준공

사업명

두산레포츠센터 조성

담당자

체육진흥과 이은지(☎666-2185)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활체육시설 확충을 통해 급증하고 있는 생활체육 동호인들의 수요 충족 및 여가활동 공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10월 ~ 2021. 12월

○ 위 치 : 두산동 산 7-2 일원(미성골프 남동편)

○ 규 모 : 부지면적 6,140㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,600 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,600	36	1,734	3,830	-
국비	960	-	-	960	-
구비	4,640	36	1,734	2,870	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018. 10월 : 기본조사설계 용역 실시

○ 2019. 5월 : 실시설계 용역 실시

○ 2019. 11월 : 소규모재해영향평가 완료

○ 2019. 12월 : 토지보상 협의 실시

□ 향후계획

○ 2020. 3월 : 실시계획인가 고시

○ 2020. 12월 : 토지수용

○ 2020. 12월 : 공사시행

○ 2021. 12월 : 준공

□ 사업변경 내역

○ 당초 지방재정 투자심사 시 총사업비 50억(2018. 10월)

○ 실시설계 용역 중 건립구조 변경으로 인해 총사업비 56억으로 증액(2019년 말)

사업명

청소년 문화의 집 건립

담당자

교육지원과 김보미(☎666-4241)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년 인구비중이 가장 높은 고산지역에 청소년을 위한 복합문화 공간을

조성하여 청소년들의 삶의 질 향상 도모

○ 정보, 문화, 교양, 공연 등 다양한 프로그램 운영과 지역사회 청소년 종합

체험 활동의 장으로 활용할 수 있도록 기능강화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 6월 ~ 2021. 1월

○ 사업위치 : 수성구 시지동 152-2번지(고산초등학교 옆)

○ 사업규모 : 부지면적 678㎡, 연면적 1911.31㎡(지하1층/지상5층)

○ 주요시설 : 강의실, 동아리실, 연습실, 체험실, 휴카페, 다목적실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,500	11	488	5,001	-
국비	2,495	11	488	1,996	-
시비	2,345	-	-	2,345	-
구비	660	-	-	660	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

○ 설계 공모 접수 및 발표 : 2018. 9. 3. ~ 2018. 9. 14.

○ 기본 및 실시 설계 : 2018. 10. 26. ~ 2019. 9. 4.

○ 여가부 기본설계 자문위 심의 : 2019. 2. 21.

○ BF예비인증 : 2019. 4. 24.

○ 일상감사 및 계약심사 : 2019. 7. 10. ~ 2019. 8. 22.

○ 착공 : 2019. 10. 31.

□ 향후계획

○ 준공 : 2021. 1월

사업명

고산서원 복원정비

담당자

문화예술과 이대기(☎666-2175)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서원의 옛 기능을 회복하여 역사 및 선비교육의 장으로 활용하고 주변

역사자원과 연계하여 관광자원으로 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2020년

○ 위 치 : 성동 산 22일원

○ 규 모 : 사당, 삼문, 담장 등 복원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 696백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
구비	696	640	16	41	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 사당 상량식 : 2020. 3월

○ 복원정비공사 준공 : 2020. 5월

○ 봉안식 : 2020. 7월

□ 향후계획

○ 서원 활용 체험 프로그램 운영 : 2020. 9월

□ 사업변경 내역

○ 당초투자심사예산 : 3,000백만원 / 최종변경예산 : 696백만원

10-2. 지방채 발행사업

우리 수성구에서 ‘19년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 수성구에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.